30

세계유산 방문자 센터 및 공산성 역사관 건립

완료

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 100% √ ‘22년 추진율 -%	공약개요 ❍ 공산성 방문자 센터 건립 - 규 모 : 지상 1층, 한옥목구조, 건축면적 319.5㎡ - 용 도 : 관광안내, 역사관, 편의공간 등

☎ 문화재과장 조병철 840-8201 / 고도육성팀장 조진석 840-8377 / 주무관 최원영 840-8382

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황 : 현 공산성 주차장 내 건립 중인 방문자센터에 공산성 역사관 기능부여

중‧장기적으로는 백제왕도 핵심유적 보존‧관리 계획에 의거 공산성 역사관 건립 추진

❍ 정책목표

- 공주 탐방의 출발점이 되는 공산성 방문자센터 건립

- 방문자센터에 공산성 역사관 기능을 부여하여 세계유산 공산성의 역사적 가치 교육 및 홍보

■ 사업개요

공산성 방문자센터 건립

❍ 위    치 : 금성동 65-3번지 일원(현 공산성 주차장)

❍ 규    모 : 지상 1층, 한옥목구조, 건축면적 319.5㎡

❍ 용    도 : 관광안내, 전시실, 편의공간 등

❍ 사 업 비 : 4,000백만원(국비 300, 도비 1,350, 시비2,350)

❍ 사업기간 : 2018. 2월 ~ 2020. 6월

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
공산성 역사관 건립	동	1			1

■ 그동안 추진실적

❍ 2018. 10월 : 실시설계 용역 완료

❍ 2019. 01월 : 공산성 방문자센터 조성사업 착수

❍ 2019. 03월 : 공산성 역사관 조성사업 착수

❍ 2019. 04월 : 부지 내에 기존건물 철거 완료 후 시굴조사 착수

❍ 2019. 05월 : 공산성 방문자센터 조성사업부지 시굴조사 완료

→ 시굴조사 중 오염토양 발견

❍ 2019. 06월 : 오염토양 정밀조사 완료

❍ 2019. 07월 : 오염토양 정화처리 실시설계용역 착수

❍ 2019. 09월 : 공사 재착수

❍ 2019. 10월 : 오염토양 정화처리공사 착수

❍ 2020. 04월 : 오염토양 정화처리공사 완료

❍ 2020. 07월 : 공산성 방문자센터 준공 및 역사관 개관

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진율	%		%	70%	100%	%	%	100%
전시사업 완료 및 전시관 개관	동			70%	100%			100%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
1			3

❍ 사업 설명회 : 1회(‘18년 11월)

❍ 언론 보도 :

- 정례브리핑  2020. 7. 28.

- 보도자료    2019. 3. 12. / 2020. 7. 30.

추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
실시설계 용역완료
사전 행정절차 완료
사업 착수
사업 완료 및 전시사업 착수
전시사업 완료 및 개관

사업별 투자계획

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	4,000	3,000	1,000
전시관 건립공사	3,000	3,000
전시사업	1,000		1,000

■ 공약가계부                                                       (단위 : 백만원)

구분	계			2018년 ~ 2019년			2020년			2021년			2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	1,500	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0
국비	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	350	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
시비	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	850	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0
민자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ 기대효과

❍ 세계유산 방문자 센터 건립으로 공산성의 세계유산적 가치 홍보 및 관광객 편의 제공에 따른

세계유산도시로의 위상 제고

❍ 공산성 인지도 제고 및 체류시간 증가에 따른 지역경제 활성화에 기여