45

유휴 공공시설에 시민과 문화예술인이 공유하는 ‘예술인회관’ 설립

완료

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 100% √ ‘22년 추진율 -%	공약개요 ❍ 유휴시설을 이용한 “문화예술인 회관” 설립 - 연습실 2실, 사무실 1실, 회의실 겸 휴게실 1실

☎ 문화체육과장 양희진 840-8230 / 문화시설팀장 이연미 840-2586 / 주무관 박현규 840-2047

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황 : 공주문예회관, 공주문화원, 고마 등 문화예술인들의 공연 및 문화예술작품 활동 지원
상설 전시관 운영 중

❍ 정책목표

- 지역 예술인들이 예술 활동을 마음껏 영위할 수 있는 공간 마련

- 지역 시민과 관광객들의 관람 접근성이 뛰어난 곳으로 위치적 이점을 이용한 지역문화예술 진흥

■ 사업개요

예술인회관 설립

❍ 사업기간 : 2018. 9. ~ 2021. 12.

❍ 사 업 비 : 800백만원(시비/중기적 확보)

❍ 사업내용

- 기존 유휴 공공시설을 이용하면 안전진단 및 리모델링을 통하여 연습실 1실, 사무실 1실,
예술전문도서관을 구비한 예술인회관 설립

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
기본실시설계 및 안전진단	건			1				%
리모델링 및 보강공사	건				1			%

■ 그동안 추진실적

❍ 2018. 10. 15. : 지역 예술인과 협의(예술인회관 건립 사업 전반 사항)

❍ 2019. 01. 07. : 문화예술 정책 간담회(시민, 지역 예술인 의견 수렴)

❍ 2019. 01. 29. : 의원 간담회(리모델링 공사비 관련)

❍ 2019. 03. 05. : 예술전문 작은도서관 관련 업무 협의(평생교육과 작은도서관팀)

❍ 2019. 04.~06. : 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역 추진(진단결과:B등급)

❍ 2019. 07.~08. : 실시 설계용역 제안공모 추진 ⇒유찰 1회(무응찰)

❍ 2019. 08. 21. : 실시설계 용역 변경 계약 의뢰(변경 : 일반입찰 방식)

❍ 2019. 09. 26. : 실시설계 용역 공고(조달청 나라장터) ⇒ 유찰 2회(무응찰)

❍ 2019. 10. 23. : 실시설계용역 계약 및 착수(25,182천원 / 과업기간 45일)

❍ 2019. 12. 18. : 공공디자인 심의(자문) 신청

❍ 2020. 02. 11. : 공공디자인 심의(자문) 승인

❍ 2020. 02.~04. : 공용건축물 대수선 신고, 건축물대장 표시정정 완료

❍ 2020. 06. 08. : 실시설계 용역 완료 및 성과 납품

❍ 2020. 06. 24. : 예술인회관 리모델링 공사 계약 의뢰

❍ 2020. 07. 01. : 예술인회관 리모델링 공사 관급자재 구입 의뢰

❍ 2020. 07. 28. : 예술인회관 리모델링 공사 전 공정 착공

❍ 2020. 08. 22. : 건물 내·외부 철거 및 설비공사 완료

❍ 2021. 02. 10. : 공사 준공

❍ 2021. 03. 15. : 개관식 개최

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진율	%		%	100%	80%	100%	%	100%
기본실시설계 및 안전진단	건	1		1				100%
리모델링 및 보강공사	건	1			80%	100%		100%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
1	-	1	-	-

❍ 2019. 01. 07. : 문화예술정책 간담회(지역 예술인 의견 수렴, 민간전문가 자문)

❍ 2019. 10. 25. : 공주문화예술진흥 시민 대토론회(지역 예술인 의견 수렴, 민간전문가 자문)

■ 향후 추진계획

❍ 예술인회관 운영 지원 및 시설유지보수(수시)

추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
기본실시설계 및 안전진단
리모델링 및 보강공사

사업별 투자계획

(단위:백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	800	0	50	750	0	0
기본실시설계 및 안전진단	50		50
리모델링 및 보강공사	750			750

■ 공약가계부                                                      (단위 : 백만원)

구분	계			2018년 ~ 2019년			2020년			2021년			2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	800	800	796	800	800	21	0	0	509	0	0	266	0	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	800	800	796	800	800	21	0	0	509	0	0	266	0
민자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ 기대효과

❍ 지역 예술인들의 예술 활동을 보장하고 연중 자유롭게 문화 공연연습을 통하여 시민들에게는 문화예술향유의 기회를 제공하고 관광객에게는 볼거리를 제공함.