46	공주시립미술관 조성

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 50% √ ‘22년 추진율 50%	공약개요 ❍ 특색있는 공주시립미술관 건립을 통하여 지역 명소로 조성 ❍ 미술전시 인프라 구축을 통한 시민 미술문화 향유기회 확대 - 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역 - 문체부 사전평가 승인 및 부지매입 - 시립미술관 조성 및 운영

☎ 문화체육과장 양희진 840-8230 / 문화시설팀장 이연미 840-2586 / 주무관 박현규 840-2047

황성림 840-2528

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황 : 웅진동 709번지 일원, 연면적 2,925㎡(대지면적 9,346㎡) 지하1층/지상2층

❍ 정책목표

- 공주시만의 특색있는 시립미술관 건립을 통한 지역 명소로 조성

☞ 기존 공주지역 내 문화관광자원과 연계한 시너지 효과 창출

- 지역내 문화예술인 작품 전시공간으로 조성 시민의 문화향유와 다양성 및 공공성 증진

■ 사업개요

타당성조사 및 기본계획수립 연구용역

❍ 사업기간 : 2019. 1월 ∼ 12월

❍ 사 업 비 : 50백만원(시비 50)

❍ 사업내용

- 시립미술관 조성을 위한 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역

▸ 박물관 및 미술관 진흥법 시행령 제7조의2(공립 박물관·공립미술관 설립타당성 사전평가)

공주시립미술관 조성

❍ 사업기간 : 2019. 1월 ∼ 2026. 9월

❍ 사 업 비 : 13,232백만원(도비 4,544.4 시비 8,687.6) ※ 미술품 구입비 별도

- 토지매입 1,921 / 공사비 8,860 / 용역비 1,285 / 기타 1,216

❍ 사업내용

- 시립미술관 조성을 위한 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역

▸ 박물관 및 미술관 진흥법 시행령 제7조의2(공립 박물관·공립미술관 설립타당성 사전평가)

- 문체부 사전평가 승인 및 부지매입 완료(사전 행정절차 이행 완료)

- 설계 및 공사 착공, 준공, 시립미술관 조성(전시공간, 교육체험공간, 수장공간 등) 및 운영

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
타당성 및 기본계획 용역	건	1				1
문체부 사전평가 승인	건	1				1
부지매입	건	1					1

■ 그동안 추진실적

❍ 2018. 10. : 지역 민간전문가 자문

❍ 2018. 11. : 타 지자체 공립미술관 벤치마킹(대전시립미술관, 정읍시립미술관)

❍ 2019. 03. : 충남역사문화연구원 업무 협의(당초 건립 예정지인‘충남역사박물관’이전계획 백지화)

❍ 2019. 09. 18. : 공주 시립미술관 건립 기본계획 및 타당성 조사 용역 계약 의뢰

❍ 2019. 10. 07. : 용역 계약 및 착수

❍ 2020. 01. 31. : 용역 중지(건립 대상지 확정 지연)

❍ 2020. 05. 01. : 현안조정 회의(시립미술관 건립 대상지 검토 보고)

❍ 2020. 06. 02. : 시립미술관 건립 타당성 조사용역 중간보고회(지역 미술인, 전문가 의견 수렴)

❍ 2020. 07. ~ : 지역 예술인 대상 FGI(포커스 그룹 인터뷰)를 통한 의견 수렴

❍ 2021. 02. 04. : 최종 사업대상지 분석보고회 개최 및 대상지 확정

❍ 2021. 03. : 사업대상지 공유재산심의 및 의회승인 완료

❍ 2021. 04. 09. : 기본계획 및 타당성 조사 용역 최종 보고회

❍ 2021. 04. 16. : 충남도립미술관 건립 추진 업무 담당 학예사 면담(벤치마킹)

❍ 2021. 04. 22 : 기본계획 및 타당성 조사 용역 중지 해제

❍ 2021. 05. ~ 06. : 시립미술관 운영 기본방향 및 전략(정체성 및 비전)수립 용역 완료, 미술학예연구사 채용 공고 및 재공고, 건립 자문위원회 구성 및 위촉

❍ 2021. 07. : 미술분야 학예연구사 채용, 문체부 사전협의(7. 23.) 및  설립타당성 사전평가 신청(7.30. 신청)

❍ 2021. 08. : 성공적인 시립미술관 건립을 위한 지역주민 의견 수렴 간담회 개최

❍ 2021. 09. : 시립미술관 자문간담회 개최 및 문체부 사전평가 현장실사(결과:부적정)

❍ 2021. 11. : 시립미술관 수집심의위원회 ․ 작품가격평가위원회 개최 및 기증작품(21점) 수증

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진율	%	100%	%	50%	60%	50%	%	50%
타당성 및 기본계획 용역	건	1				1		100%
문체부 사전평가 승인	건					50%		50%
부지매입	건							-%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
2	-	3	-	-

❍ 2018. 10. : 지역 민간전문가 자문

❍ 2018. 11. : 타 지자체 공립미술관 벤치마킹(대전시립미술관, 정읍시립미술관)

❍ 2019. 10. 25. : 공주문화예술진흥 시민 대토론회(지역 예술인 의견 수렴, 민간전문가 자문)

❍ 2021. 08. 24. : 성공적인 시립미술관 건립을 위한 시민 및 미술인 의견수렴 간담회 개최

❍ 2021. 12. 04. : 유홍준과 함께하는 아트토크쇼(공주시립미술관의 설립 타당성과 방향)

■ 향후 추진계획

❍ 2022. 1. ~ 4. : 문체부 설립타당성 사전평가 재신청 및 평가 완료

❍ 2022. 6. : 시립미술관 세부운영방안 연구용역 완료

❍ 2022. 5. ~ 8. : 도 투자심사 의뢰 및 완료  ※문체부 사전평가 승인 완료 후 가능

❍ 2022. 9. ~10. : 공주시립미술관 건립을 위한(청전 작고 50주년) 학술행사 및 전시 개최

❍ 2022. 11.~12. : 공주시 미술은행(시립미술관 소장품 수집)

❍ 2022. 9. ~ ‘23. 4. : 도비 확보 및 부지매입, 공공건축심의회 심의. 설계 공모

❍ 2023. 4. ~ 10. : 기본 및 실시 설계

❍ 2023. 11. ~ ‘24. 4. : 건축허가 및 각종 인증(교통, 환경, 재해영향평가)

❍ 2024. 6. ~ ‘26. 6. : 공사착공 및 준공

추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
타당성 및 기본계획 용역
문체부 사전평가 승인
부지매입

사업별 투자계획

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	13,282				50	1,921	11,311
타당성 및 기본계획 용역	50				50
문체부 사전평가 승인	0
부지매입 완료	1,921					1,921
설계 및 공사착공,준공	11,311						11,311

■ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2018년 ~ 2019년			2020년			2021년			2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	1,971	462	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	1,921	412	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	1,971	462	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	1,921	412
민자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ 기대효과

❍ 지역의 문화·예술인  미술의 활성화로 시민들의 감성 문화 배양 및 공공성 증진

❍ 전시와 교육프로그램으로 공공 교육의 발전과 시민의 문화 향유 증진