47	연미산 ‘자연미술 비엔날레 전용관’ 설치

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 63% √ ‘22년 추진율 50%	공약개요 ❍ 자연미술 비엔날레 전용관 건립 ❍ 사업기간 : 2018. 9. ~ 2024. 12. ❍ 사 업 비 : 4,775백만원(도 1,865, 시 2,910) ❍ 사업내용 - 작가, 스텝, 관람객 구역을 조성하여 작업실과 준비실, 사무실과 휴게실, 수장고, 전시실과 다목적실로 구성된 지상 2층 건물과 부속시설 신축

☎ 문화체육과장 양희진 840-8230 / 문화시설팀장 이연미 840-2586 / 주무관 황인순 840-2546

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황 :「2014년 금강자연미술 비엔날레 건립 기본구상 및 타당성 조사 연구용역」을 하였으나 제10차 문화재위원회 천연기념물분과위원회 검토(2014. 10. 29.) 결과 용역기관에서 작성된 사업계획서의 조감도 및 평면도로 승인여부를 판단할 수 없었음

❍ 정책목표

- 시민들과 함께 자연미술을 학습하고 체험하는 장소 마련

- 연미산 ‘금강 자연미술비엔날레관’을 설치하여 대한민국 자연미술의 성지로서 자리매김

■ 사업개요

연미산‘금강 자연미술비엔날레관’ 설립

❍ 사업기간 : 2018. 9. ~ 2024. 12.

❍ 사 업 비 : 4,775백만원(도 1,865, 시 2,910)

❍ 사업내용

- 작가, 스텝, 관람객 구역을 조성하여 작업실과 준비실, 사무실과 휴게실, 수장고, 전시실과 다목적실로 구성된 지상 2층 건물과 부속시설 신축

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
자문워크숍	건	1		1
기본계획 및 타당성조사 용역 실시	건	1			1
문화재 현상변경 허가	건	1				1
지방재정투자 심사 및 예산 확보	건	1					1

■ 그동안 추진실적

❍ 2019. 01. 31. : 학술연구용역 사전심의(금강자연미술비엔날레관 기본계획 및 타당성조사 용역)

❍ 2019. 03. : 예산 확보(2019년 1회 추경, 연구용역비 60백만원)

❍ 2019. 05. 16. : 기본계획 및 타당성 조사 용역 계약 의뢰

❍ 2019. 08. 01. : 용역 계약 및 착수

❍ 2019. 10. 25. : 공주문화예술진흥 시민 대토론회(지역 예술인 의견 수렴, 민간전문가 자문)

❍ 2020. 01. 31. : 용역 완료

❍ 2020. 05. 15. : 금강자연미술비엔날레관 건립 사업 문화재 현상변경 연구 용역 착수

❍ 2020. 10. ~  : 문화재 현상변경을 위한 심의위원 개별면담 추진

❍ 2020. 11.~ 2021. 02.  : 문화재 현상변경 허가 심의 신청자료(도면 등) 보완 및 신청

❍ 2021. 03. : 문화재 현상변경 허가 신청 불허 통보 (문화재청 천연기념물과)

❍ 2021. 07. 금강자연미술비엔날레관 진행상황 간담회 개최

❍ 2021. 10. 문화재 현상변경 허가 신청을 위한 기본설계 용역 착수

❍ 2021. 11. 문화재청 방문 현상변경 허가 관련 면담

❍ 2021. 12. 문화재 현상변경 허가 신청을 위한 토목측량 및 수목조사 실시

❍ 2022. 03. 문화재청 방문 현상변경 허가 관련 면담

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진율	%	2	-%	100%	100%	50%	50%	63%
자문워크숍	건	1	-	1	-	-	-	100%
기본계획 및 타당성조사 용역 실시	건	1	-	-	1	-	-	100%
문화재 현상변경 허가	건	-	-	-	-	50%	50%	50%
지방재정투자 심사 및 예산 확보	건	-	-	-	-	-	-	-%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
4	-	3	-	-

❍ 2019. 10. 25. : 공주문화예술진흥 시민 대토론회(지역 예술인 의견 수렴, 민간전문가 자문)

❍ 2020. 01. 03. : 기본계획 및 타당성 조사 용역 중간보고회(지역 예술인 의견 수렴, 민간전문가 자문)

❍ 2020. 02. 04. : 기본계획 및 타당성 조사 용역 최종보고회(지역 예술인 의견 수렴, 민간전문가 자문)

❍ 2021. 07. 16. : 지역예술인 대상 추진현황 설명회

■ 향후 추진계획

❍ 2021. 09. ~ 2022. 04. : 문화재현상변경 심의 신청(문화재청)

❍ 2022. 06. ~ 2022. 12. : 지방재정투자심사 등 사전절차 이행 및 도비 예산 확보

❍ 2023. 01. ~ 2023. 08. : 설계 공모 및 실시설계

❍ 2023. 09. ~ 2024. 12. : 금강자연미술비엔날레관 건립 착공 및 준공

추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
자문워크숍
기본계획 및 타당성조사 용역 실시
현상변경 허가
지방재정투자 심사 및 예산 확보

사업별 투자계획

(단위:백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	4,775		60	22	30	382	4,281
자문워크숍	-
기본계획 및 타당성조사 용역 실시	60		60
현상변경 허가	52			22	30
지방재정투자 심사 및 예산 확보	4,663					382	4,281

■ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2018년 ~ 2019년			2020년			2021년			2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	494	112	47	60	60	47	22	22	0	30	30	0	382	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	0	0
시비	342	112	47	60	60	47	22	22	0	30	30	0	230	0	0
민자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ 기대효과

❍ 지역문화시설 확충 및 문화적 소외감 해소

- 충남도내 공공미술관으로서 지역민들의 문화적 소외감 해소를 위한 공공문화 서비스 제공

❍ 지역사회 문화휴식공간 및 관광자원 발굴

- 기존 역사문화관광자원과 연계한 새로운 생태문화 관광자원 개발로 인근 지역 잠재 수요 유인