51	이삼평 도자문화예술단지 조성

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 60% √ ‘22년 추진율 20%	공약개요 ❍ 사업기간 : 2019. ∼ 2022 (4년) ❍ 장 소 : 반포면 학봉리 일원 ❍ 사업내용 : 타당성 검토 및 조성계획 용역, 토지매입, 이삼평 도자문화거리 조성, 도자 거점센터 및 전시관, 체험관, 도자랜드마크, 진입로 등 시설물 건축

☎ 문화체육과장 양희진 840-8230 / 문화시설팀장 이연미 840-2586 / 주무관 박현규 840-2047

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황 : 국내 3대 도요지, 철화분청사기, 일본도조 이삼평 고향 등 정통성과 역사성, 이야기 자원을         보유하고 있으나 대내·외 인지도가 미흡하고, 계룡산도예촌과 이삼평공원 등 관련 시설물도         타 지역 경쟁 도시와 비교하면 매우 열악한 실정임.

❍ 정책목표

- 경기도 이천, 전남 강진 등에 버금가는 도시로 발전 시켜나가기 위한 다각적인 사업 발굴

- 공주 도자문화 자생력 구축 및 이삼평 도자예술단지 조성

■ 사업개요

이삼평 도자문화예술단지 조성

❍ 사업기간 : 2019. ∼ 2024. (6년)

❍ 총사업비 : 18,700백만원(부지매입비 7,300백만원 건축비 11,400백만원)

- 도비 4,900백만원 / 시비 13,800백만원

❍ 사업별 추진계획

- 타당성 검토 및 조성계획 용역 시행 : 2019. 3. ∼ 10.

- 지방재정투자심사의뢰 : 중앙투자심사통과 2021년

- 토지 매입 : 2022년

- 도시관리계획지정고시 및 실시설계 반영, 사업착공 : 2023년

- 시설물 건립 : 2024년 / 이삼평 기념관, 전수관 및 공방, 체험장, 대가마, 공연장 등

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
조성계획 용역	식	1		1
지방재정투자심사 및 부지매입	식	1				1	1

■ 그동안 추진실적

❍ 2019. 03. : 이삼평 도자문화예술단지 조성 기본계획 수립 연구용역 발주

❍ 2019. 04. : 기본계획 수립 연구용역 착수보고회 개최 및 시민, 관계자 의견 수렴

❍ 2019. 08. : 기본계획 수립 연구용역 중간보고회 개최 및 시민, 관계자 의견 수렴

❍ 2019. 10. : 기본계획 수립 연구용역 최종보고회 개최(용역 결과 발표 및 시민, 관계자 의견 수렴)

❍ 2020. 04. : 이삼평 도자문화예술단지 조성 기본계획 수립

❍ 2021. 03. ~ 04. : 투자심사자료 컨설팅(충남연구원)

❍ 2021. 05. ~ 08. : 투자심사 자료 제출(충청남도) ⇨ 결과 : 재검토

❍ 2021. 10. : 투자심사 충남도 재검토 의견 보완 컨설팅 용역 발주

❍ 2021. 12.~ 2022. 02. : 2022년 제1차 충남도 투자심사 자료 제출(충청남도) ⇨ 결과 : 재검토

확인지표	단위	실적	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진율	%	100%	100%	10%	20%	20%	60%
조성계획 용역	식	1	1				100%
투자심사 및 부지매입 완료	식			10%	20%	20%	20%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
3		1

❍ 2018. 12. : 도예전문가 자문

❍ 2019. 04. : 기본계획 수립 연구용역 착수보고회(반포면 마을 주민 15명 참석 및 의견수렴)

❍ 2019. 08. ~ 10.: 중간, 최종보고회(반포면 마을 주민 15여명 및 관계자 의견수렴)

■ 향후 추진계획

❍ 2022. 05. ~ 12. : 충청남도 투자심사(재상정) 승인 및 부지매입

❍ 2022. 08. ~ 2023. 02. : 도시관리계획변경 및 실시설계용역

❍ 2023. 03. ~ 2024. 12. : 공사 착공 및 준공

추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
조성계획 용역
투자심사 및 부지매입 완료

사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	18,700		50	0	0	7,400	11,250
조성계획 용역	50		50
투자심사 및 부지매입 완료	7,400					7,400
설계 및 공사 착공,준공	11,250						11,250

■ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2018년 ~ 2019년			2020년			2021년			2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	7,450	50	20	50	50	20	0	0	0	0	0	0	7,400	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	7,450	50	20	50	50	20	0	0	0	0	0	0	7,400	0	0
민자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ 기대효과

❍ 공주시가 보유한 도공 이삼평 콘텐츠와 반포면 학봉리 지역의 도자유적지를 활용해 문화와 관광이 융합된 복합문화예술 단지를 조성하여, 침체된 도자산업을 활성화하고 대한민국 대표 도자도시로서 위상 제고