85

국가복합연수단지 진입도로(면도101호선)확포장

완료(지속)

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 100% √ ‘22년 추진율 -%	공약개요 ❍ 면도101호 확포장 - 사 업 량 : 도로 L=5.2km, B=10m, 교량3개소 등 · 1구간(호계리~화월리) L=1.0km, 교량 2개소 - 사업기간 : 2018 ~ 2020 - 사 업 비 : 95억원 - 위 치 : 호계리 ~ 화월리

☎ 도로과장 김영준 840-8560 / 도로계획팀장 조남철 840-8386 / 주무관 유노경 840-8387

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황 : 소방방재교육연구단지의 개원에 따른(19년 3월 개원예정) 교육생들의 교통량 증가로                 교통체증 및 지역주민들의 안전에 영향을 줄 것으로 예상

❍ 정책목표

- 국가기관 이전과 향후 차질 없는 기관운영을 위하여 적기에 연수단지 진입도로 확포장 완료

- 1단계(호계리~화월리/1km) 구간을 20년 연말까지 완료하고 단계적으로 2,3단계 구간 확포장 추진

■ 사업개요

면도 101호선 확포장

❍ 사업기간 : 2018. 1 ~ 2020. 12(1구간/1km)

❍ 사 업 비 : 9,500백만원(국비 4,200, 도비 1,200, 시비 4,100)

❍ 사업내용

- 복합연수단지 진입도로 확포장 / L=1.0km, B=10.0m

▸ 호계리 ~ 화월리 도로 확포장

▸ 교량 2개소 재가설(화월교, 월은교)

※ 화월교 재가설공사 추진 중(1차 공사 추진 중)

❍ 전체구간 소요 사업비 현황

- 사 업 량 : 도로확포장(L=5.2km, B=10.0m), 교량 3개소 등

- 사 업 비 : 233억원

구 분	1구간	2구간	3구간
사 업 량	L=1.0km, B=10.0m	L=2.26km, B=10.0m	L=1.94km, B=10.0m
사 업 비	95억	51억	87억
내 용	교통영향평가 공주시 의무이행구간

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
실시설계	완료	1	1
토지 및 지장물 보상	완료	1	1
진입도로 확포장	완료	1			1

■ 그동안 추진실적

❍ 토지 및 지장물 보상

- 중앙토지수용위원회 사업(의제)인정 의견없음 통보

- 2020. 5. : 보상추진(2구간/화월~계실, L=2.26km)

❍ 진입도로 확포장

- 2019.  5. : 호계리 ~ 화월리 마을간 연결도로 공사(1구간) 2차 발주

- 2019.  5. : 주민설명회 2회(화월리 마을회관 / 계실리 노인회관)

- 2019.  6. : 2구간(화월리~계실리) 사업 착공

- 2019. 12. : 화월교 재가설공사(1구간 1차분) 준공

- 2021.   6.  : 1구간(호계~화월 / L=1.0km) 사업완료

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진율	%		100%	100%	100%	100%	%	100%
실시설계	완료	1	1					100%
토지 및 지장물 보상	완료	1		50%	100%			100%
진입도로 확포장	완료			50%	95%	1		100%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
2

■ 향후 추진계획

❍ 2021. 6. : 1구간(호계~화월 / L=1.0km) 사업완료(공약 완료)

※ (추가 사업) 2022. 6. : 2구간 사업완료(화월~계실 / L=2.26km) 사업완료

추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
토지 및 지장물 보상
진입도로 확포장

사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	9,500	1,000	5,000	3,500
토지 및 지장물 보상	1,000	1,000
진입도로 확포장	8,500		5,000	3,500

■ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2018년 ~ 2019년			2020년			2021년			2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	9,500	9,500	8,691	6,000	9,500	5,081	3,500	0	2,104	0	0	1,506	0	0	0
국비	4,500	4,195	4,191	3,000	4,195	3,677	1,500	0	511	0	0	3	0	0	0
도비	0	1,173	993	0	1,173	507	0	0	278	0	0	208	0	0	0
시비	5,000	4,132	3,507	3,000	4,132	897	2,000	0	1,315	0	0	1,295	0	0	0
민자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ 기대효과

❍ 연수단지 진입도로 확포장(왕복 2차선)으로 교통체증 해소

❍ 마을 주민 및 연수단지 이용객들의 교통사고 위험 감소