86

금암교(공주IC) ~ 목천교차로 4차선 확장

완료(지속)

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 100% √ ‘22년 추진율 -%	공약개요 ❍ 사업기간 : 2019 ~ 2022 ❍ 사 업 비 : 11,000백만원(시비 11,000) ❍ 사업내용 : 도로확장 L=1.6km(2차선→4차선)

☎ 도로과장 김영준 840-8560 / 도로계획팀장 조남철 840-8386 / 주무관 유노경 840-8387

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황 : 대전~당진간 고속도로 개통으로 공주IC를 이용하는 물류차량 및 관광객 증가

❍ 정책목표

- 금암교(공주IC) ~ 목천교차로 기존 2차선 구간을 4차선으로 확장하여 교통흐름을 개선하고      교통안전 확보 추진

■ 사업개요

금암교(공주IC) ~ 목천교차로 확포장 사업

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2022

❍ 사 업 비 :  11,000백만원(시비11,000)

❍ 사업내용

- 도로확장 L=1.6km(2차선→4차선)

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
실시설계용역	건	1		1
관련법 협의	건	1		1
편입토지 보상 및 사업착공	건	2			1	1

■ 그동안 추진실적

❍ 2018년 2회 추경 실시설계용역비 3억 원 확보

❍ 2018. 12. : 실시설계용역 착수

❍ 2019.  5. : 주민설명회(신관 공공하수처리장 세미나실)

❍ 2019. 12. : 교통, 재해영향평가용역 완료

❍ 2020.  3. : 분할측량 완료

❍ 2020.  5. : 감정평가 의뢰

❍ 2020.  7. : 손실보상 협의 요청

❍ 2020. 12. : 손실보상 협의 완료

❍ 2021.  1. : 사업 착공(전체분, 1차분)

❍ 2022.  3. : 1차분 사업 준공 및 2차분 사업 착공

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진율	%		%	100%	100%	100%	%	100%
실시설계용역	건	1		1				100%
관련법 협의	건	1		1				100%
편입토지 보상 및 사업착공	건	2			1	1		100%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

주민설명회	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
1

■ 향후 추진계획

❍ 2022. 03. : 2차분 사업 착공

❍ 2022. 04. : 3차분 사업 착공

❍ 2022. 09. : 2차분 사업 준공

❍ 2023. 03. : 사업 준공(전체분, 3차분)

추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
실시설계용역
관련법 협의
편입토지 보상 및 사업완료

사업별 투자계획                                                  (단위 : 백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획(백만원)					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	11,000	300	2,700	4,000	4,000
실시설계용역	300	300
관련법 협의
편입토지 보상 및 사업완료	10,700		2,700	4,000	4,000

■ 공약가계부                                                        (단위 : 백만원)

구분	계			2018년 ~ 2019년			2020년			2021년			2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	11,000	7,400	4,039	3,000	1,500	1,480	4,000	3,000	866	4,000	1,700	1,693	0	1,200	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	4,500	3,447	1,208	1,500	600	600	2,000	1,500	20	1,000	1,200	588	0	147
시비	6,500	3,953	2,831	1,500	900	880	2,000	1,500	846	3,000	500	1,105	0	1,053
민자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 2020년 확보예산 3,000 백만원 중 1,000 백만원 특별조정교부금(道)

■ 기대효과

❍ 행복도시 ~ 공주(2구간) 도로건설공사 개통 예정(2019년)에 따른 도로의 연속성 확보를 통한     교통체증 개선

❍ 주변지역(금흥동, 월송지구)의 발생 교통량을 고려한 4차선 확장을 통해 체계적인 교통망 구축