88

송선농공단지교차로~송선교차로 도로확장 조기추진

완료(지속)

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 100% √ ‘22년 추진율 100%	공약개요 - 위 치 : 금흥동 고향칼국수 ~ 충남도 종합건설사업소 앞 - 노 선 명 : 도시계획도로 중로1-46호선 - 사 업 량 : L=442m, B=24m (2차로 ⇒ 4차로) - 사 업 비 : 4,000백만원(시비) - 사업기간 : 2019 ~ 2021년 ※ 공주BRT 1단계 노선 확정 시 6차로 변경 필요

☎ 도로과장 김영준 840-8560 / 도시계획도로팀장 정종찬 840-8551 / 주무관 조창근 840-8552

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황 : 송선농공단지교차로 ~ 송선교차로 2차선 도로

❍ 정책목표

- 공주 ~ 세종시 도로 확·포장공사와 연결하기 위해 도로 확장 추진 (2차로 ⇒ 4차로)

■ 사업개요

송선농공단지교차로~송선교차로 도로확장

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2021년

❍ 사 업 비 : 4,000백만원(시비)

❍ 사업내용

- 도시계획도로(중로1-46호) 확․포장

▸ L=442m, B=24m

▸ 2차로 ⇒ 4차로

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
지방재정투자심사	건	1	1
중기지방재정계획	건	1	1
토지 및 지장물 보상	건	1		1
사업 착공	건	1				1

■ 그동안 추진실적

❍ 2017. 12. : 실시설계용역 완료

❍ 2018. 03. : 토지 및 지장물 보상협의 착수

❍ 2018. 09. : 중기지방재정계획 반영 및 지방재정투자심사(2018년 3회추경)

❍ 2019. 05. : 소규모 환경영향평가 용역 착수

❍ 2020. 06. : 한전 밑 통신선로 지중화 협약 체결

❍ 2020. 05. : 실시계획인가 고시

❍ 2020. 10. : 공사 착공

❍ 2021. 06. : 지방토지수용위원회에 토지 수용 신청(1필지)

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진율	%		100%	50%	90%	70%		90%
지방재정투자심사	건	1	1					100%
중기지방재정계획	건	1	1					100%
토지 및 지장물 보상	건			80%	90%	100%		100%
사업 착공	건				100%			100%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타

❍

■ 향후 추진계획

❍ 2022. 06. : 사업 준공

추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
토지 및 지장물 보상협의
중기지방재정계획
지방재정투자심사
사업 착공 및 준공

사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	4,000	1,800	1,000	1,200
토지 및 지장물 보상협의	2,800	1,800	1,000
사업 착공 및 준공	1,200			1,200

■ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2018년 ~ 2019년			2020년			2021년			2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	4,000	3,997	3,108	2,800	3,800	2,600	1,200	0	358	0	0	150	0	197	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	4,000	3,997	3,108	2,800	3,800	2,600	1,200	0	358	0	0	150	0	197	0
민자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ 기대효과

❍ 행복도시 ~ 공주2구간 도로건설공사 준공(2022년) 시기에 맞춰 도로 확·포장 공사를 완료하여        교통 불편해소 및 지역균형 발전 도모