90	광역상수도망 확대 추진

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 95% √ ‘22년 추진율 95%	공약개요 ❍ 광역상수도 미 공급지역 조기 공급 추진 - 현재 상습적인 물 부족 지역인 유구읍까지 광역상수도망 확장사업 조기 완공을 추진(장기적으로 유구읍 상수원보호 구역 해제 추진) - 미 공급 지역 조기에 광역상수도 공급 추진해 83%(공주시 2016년 기준)인 상수도 보급률을 전국 평균인 96%(2016년 기준)까지 달성 추진

☎ 상하수도과장 박지동 840-8601 / 상수도팀장 김태완 840-8611 / 주무관 주민우 840-8612

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황 : 동지역, 유구읍, 계룡면, 반포면, 우성면, 사곡면 상수도 현재 공급 中

→ 상수도 보급률 :‘16년(83%),‘17년(85%),‘18년(87%)

❍ 정책목표

- 상수도 미공급 지역의 조속한 사업추진을 통한 상수도 조기 공급 추진

- 급수구역 확충을 통한 상수도 보급률 제고

■ 사업개요

신풍 농어촌지방상수도 확충사업

❍ 사업기간 : 2015 ~ 2021

❍ 사 업 비 : 42,253백만원(국비 24,844, 도비 4,259, 시비 6,389, 기타 6,761)

❍ 사업내용 : 송배수관 17.3km, 급배수관 136.7km, 배수지 1개소, 가압장 9개소

4개면 농어촌지방상수도 확충사업

❍ 사업기간 : 2017 ~ 2022

❍ 사업구간 : 정안, 의당, 이인, 탄천

❍ 사 업 비 : 25,405백만원(국비 17,784, 도비 3,048, 시비 4,573)

❍ 사업내용 : 송배수 및 급수관리 119.8km

※ 총사업비 및 사업기간 변경 예정

신풍~유구간 비상연계관로 설치공사

❍ 사업기간 : 2017 ~ 2020

❍ 사 업 비 : 3,000백만원(국비 2,100, 도비 450, 시비 450)

❍ 사업내용 : 비상연계 관로설치 L=6.6kmm

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
상수도 보급률	%	96	87	90	92	94	96

■ 그동안 추진실적

신풍 농어촌지방상수도 확충사업

❍ 2021. 12. : 3차분 사업완료(급수공급 : 산정, 조평, 대룡2, 입동, 백룡, 선학, 영정, 평소, 화흥리)

❍ 2022.  3. : 4차분 착공(대룡1, 용수, 봉갑, 동원2리)

❍ 2022. 10. : 4차분 준공

4개면 농어촌지방상수도 확충사업

❍ 2021.  3. : 충남도 건설기술심의 완료

❍ 2021.  5. : 행정절차(도로점용, 하천점용, 산지전용 등) 이행

❍ 2021.  6. : 건설기술관리용역 착수 및 용역중지(건설공사 착공시기 미도래)

❍ 2021. 11. : 조달청 원가심사 및 계약의뢰

❍ 2022.  2. : 시설공사 계약체결(대전지방조달청)

❍ 2022.  3. : 시설공사 전체분 및 1차분 착공

신풍~유구간 비상연계관로 설치공사

❍ 2020. 12. : 사업 준공

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진율	%	-	95%	95.3%	95.6%	95%	95%	95%
상수도 보급률	%	-	82.7	85.8	88.0	88.2	90.0	95%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
5	-	-	4	-

❍ 주민설명회

- 2015. 03 : 설계추진 설명 및 주민의견 수렴

- 2016. 10 : 지역주민 대상 사업설명회

- 2018. 12 ~ 2019. 01 : 급수관로 공사에 따른 마을순회 사업설명회

- 2021. 8. ~ 9. : 4개면 지방상수도 확충사업 주민설명회(이인, 탄천면)

- 2022. 1. : 2022년 찾아가는 시정설명회(이인, 정안면)

❍ 언론보도

- 2015. 04 : 신풍면 상수도 공사 예산 확보

- 2017. 07 : 신풍면 상수도 공사 추가 예산 확보

- 2018. 06 : 신풍면 2단계 상수도 확충사업 본격 추진

- 2021. 11. : 신풍면 지방상수도 확충사업 추진

■ 향후 추진계획

신풍 농어촌지방상수도 확충사업

❍ 2022. 10. : 4차분 준공(대룡1, 용수, 봉갑, 동원2리)

❍ 2023. 12. : 전체분 사업완료(신풍면 전지역 상수도 공급)

4개면 농어촌지방상수도 확충사업

❍ 2022. 12. : 시설공사 1차분 준공

❍ 2024. 12. : 전체분(1단계) 사업완료

추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
신풍 농어촌지방상수도
4개면 농어촌지방상수도
신풍~유구간 비상연계관로

사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	61,779	7,437	17,362	16,660	15,210	5,110
신풍 농어촌지방상수도	35,279	7,167	7,912	10,100	10,100	-
4개면 농어촌지방상수도	23,500	170	8,000	5,110	5,110	5,110
신풍~유구간 비상연계관로	3,000	100	1,450	1,450	-	-

■ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2018년 ~ 2019년			2020년			2021년			2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	61,779	39,290	30,973	24,799	13,646	13,646	16,660	8,804	8,804	15,210	8,500	8,500	5,110	8,340	23
국비	41,063	11,845	11,845	15,179	10,045	10,045	11,660	1,800	1,800	10,647	0	0	3,577	0	0
도비	7,254	20,958	13,889	2,816	2,025	2,025	2,000	4,619	4,619	1,825	7,225	7,225	613	7,089	20
시비	12,272	6,487	5,239	5,614	1,576	1,576	3,000	2,385	2,385	2,738	1,275	1,275	920	1,251	3
민자	1,190	0	0	1,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ 기대효과

❍ 안전하게 먹을 수 있는 용수공급을 통한 시민 행복증진 도모

❍ 농촌지역 지하수 고갈과 오염에 따른 식수 걱정 해소