93

주차장 조성 종합계획을 통한 주차장 확충

완료(지속)

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 100% √ ‘22년 추진율 -%	공약개요 ❍ 주차장 조성 종합계획 수립 및 순차적 확충 - 종합계획 수립으로 그간 단편적으로 추진된 주차장 정책을 체계적으로 관리 - 강북 아파트 및 상가 밀집지역, 읍면 소재지에 공영주차장 확충

☎ 교통과장 황의배 840-8481 / 교통안전팀장 김찬영 840-8501 / 주무관 함충훈 840-8502

■ 주차장 현황 및 정책목표

❍ 주차장 현황

(2018.7.31 기준)

행정동	자동차등록대수	합계		공영주차장		민영주차장		부설주차장		주차 확보율	비고
		개소	면수	개소	면수	개소	면수	개소	면수
전체	54,048	3,494	48,254	139	6,016	1476	23,423	1,879	18,815	89.2%
강북	15,698	1,003	11,634	19	1,233	2	184	982	10,217	74.1%
강남	13,505	989	12,122	100	4,191	7	325	882	7,606	89.7%
읍·면	24,845	1,502	24,498	20	592	1,467	22,914	15	992	98.6%

❍ 정책목표

- 주차장 조성 종합계획을 체계적으로 수립하여 강북 아파트, 상가 밀집지역, 읍․면 소재지에

공영주차장 확충

- 적재적소에 맞춤형 주차장 조성으로 주차난 완화 및 교통소통 기여

■ 사업개요

강북지역 아파트, 상가 밀집지구 및 읍·면지역 주차장 조성

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년(계속)

❍ 사 업 비 : 10,500백만원(시비 10,500)

❍ 사업내용 : 강북지역 주차장 200면, 읍면지역 10개소

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
강북 지역 주차장 조성 면수	면	200	25	50	50	50	25
읍면지역 주차장 조성 개소	개소	10	2	2	2	2	2

■ 그동안 추진실적

❍ 강북지역 주차장 5개소(206면) 조성완료

❍ 읍·면지역 주차장 15개소(376면) 조성완료

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진율	%		100%	100%	99%	100%	-%	100%
강북 지역 주차장 조성 면수	면	206	108	56	42	0	-	103%
읍면지역 주차장 조성 개소	개소	15	4	5	1	5	-	150%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
-	-	-	-	-

■ 향후 추진계획

❍ 2022.  1. ~ 12. : 강북지역 1개소(25면), 읍·면지역 3개소(111면) 조성 추진

추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
읍·면·동 대상지 조사
대상지 확정 및 공유재산 심의
예산요구 및 의회제출
편입 토지 대상지 감정평가
보상협의 및 실시설계
공사 착공 및 준공

사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
주차장 조성	10,500	500	2,500	2,500	2,500	2,500

■ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2018년 ~ 2019년			2020년			2021년			2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	10,500	14,435	9,920	3,000	4,600	4,544	2,500	3,105	3,105	2,500	3,530	2,271	2,500	3,200	0
국비	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	10,500	13,435	9,920	3,000	4,600	4,544	2,500	3,105	3,105	2,500	2,530	2,271	2,500	3,200
민자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ 기대효과

❍ 맞춤형 주차장 조성을 통한 시민불편 해소 및 삶의 질 향상

❍ 상가 밀집지역 주차난 해소로 지역경제 활성화 기여