95

금강둔치 신관공원 편의휴게시설 설치

완료

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 100% √ ‘22년 추진율 -%	공약개요 ❍ 금강신관공원 편의점(수변카페) 설치 - 사업기간 : 2019. 2월 ~ 2019. 12월 - 사 업 비 : 200백만원 (시비 200) ❍ 금강신관공원 어린이놀이터 조성 - 사업기간 : 2019. 2월 ~ 2020. 12월 - 사 업 비 : 233백만원 (국비 70, 도비 81.5 시비 81.5)

☎ 건설과장 김진택 840-8311 / 하천관리팀장 심효섭 840-8604 / 주무관 유재욱 840-8652

☎ 환경보호과장 황인일 840-8521 / 환경시설팀장 민승기 840-8523 / 주무관 김자영 840-8539

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황 : 시민과 방문객 다수가 찾는 금강신관공원에 편의휴게시설 부족으로 이용 중 불편사항 발생

❍ 정책목표

- 금강신관공원 둔치에 편의점(수변카페)를 설치하여 시민 및 방문객에게 편의제공

- 놀이공원 조성으로 이용시민(아이들)을 위한 금강신관공원 활용성 제고 및 브랜드화 추진

■ 사업개요

편의점(수변카페) 설치

❍ 사업기간 : 2019. 2월 ~ 2019. 12월

❍ 사 업 비 : 200백만원 (시비 200)

❍ 사업내용

- 편의점(수변카페) 설치 및 위탁관리업체 선정

▸금강신관공원 홍수위 위 둔치사면 편의점 설치

▸대전지방국토관리청과 편의점 설치를 위한 하천점용 협의 추진

▸(문제점 및 대책) 하천점용 협의 불가 시 푸드트럭 존 설치 및 입점업체 모집

어린이놀이터 조성

❍ 사업기간 : 2019. 2월 ~ 2019. 12월

❍ 사 업 비 : 233백만원 (국비 70, 도비 81.5 시비 81.5)

❍ 사업내용

- 아이뜨락 생태놀이터 환경부 공모사업 추진

▸공원 내 RC카 부지에 고마곰 그물오르기, 통나무 통과하기, 균형징검다리 등 설치

▸(문제점 및 대책) 하천점용 협의 불가 시 정안천변으로 놀이터 대상지 변경(道협의 필요)

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
편의점 설치	건	1		1
어린이놀이터 조성	건	1		1

■ 그동안 추진실적

❍ 2019.  9. : 편의휴게시설(금강쉼터) 설치 완료

❍ 2019.  9. : 생태놀이터(아이뜨락 생태놀이터) 조성 관련 국가지정문화재 주변 행위허가 완료

생태놀이터(아이뜨락 생태놀이터) 하천점용허가 완료

❍ 2019. 12. : 생태놀이터(아이뜨락 생태놀이터) 조성사업 준공

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진율	100%		%	100%	%	%	%	100%
편의점 설치	1건	1		1				100%
어린이놀이터 조성	1건	1		1				100%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
				1

❍ 명칭 선정 시 주민의견수렴을 위한 공모 제안(우리시 SNS, 홈페이지 등 활용) 추진

■ 향후 추진계획

❍ 편의점(수변카페) 설치

- 편의휴게시설 시설물 유지관리 등

❍ 어린이놀이터 조성

- 아이뜨락 생태놀이터 시설물 유지관리 등

추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
편의점 설치 하천점용협의
편의점 설치 추진 및 완료
편의점 운영 위탁업체 선정
어린이놀이터 하천점용협의
환경부 공모사업 선정
놀이터 사업추진 및 완료

사업별 투자계획                                                   (단위 : 백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	313	-	313		-	-	-
편의점 설치	80	-	80		-	-	-
어린이놀이터 조성	233	-	233		-	-	-

■ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2018년 ~ 2019년			2020년			2021년			2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	313	313	200	313	313	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
국비	70	70	60	70	70	60	0	0	0	0			0
도비	81.5	81.5	70	81.5	81.5	70	0	0	0	0			0
시비	161.5	161.5	70	161.5	161.5	70	0	0	0	0			0
민자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0

■ 기대효과

❍ 우리시를 대표하는 시민 휴식공간인 금강신관공원에 편의점(수변카페) 설치와 생태놀이터 조성으로 편의제공 및 시민복지 향상 도모

❍ 신관공원 활용성 상승과 브랜드화롤 방문객 증가에 따른 관광 명소화 및 지역경제활성화 도모