97

공공와이파이 존 확대 구축

완료(지속)

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 100% √ ‘22년 추진율 20%	공약개요 ❍ 공공와이파이 존 확대 구축(총 90개소 확대) - 주민들의 정보접근 기회확대 - 시민 및 관광객 통신비 절감

☎ 감사정보담당관  조성상 840-2080 / 통신팀장 안기수 840-8116 / 주무관 오창섭 840-8120

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황 : 73개소 (매칭펀드 방식 52개소, 통신사자체구축후 개방18개소, 자체구축 3개소)

❍ 정책목표

- 공공장소 및 관광지에 공공와이파이를 확대 구축하여 시민 및 관광객의 원활한 인터넷 접속환경 조성

■ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019년~2022년

❍ 사 업 비 : 435백만원(시비)

❍ 사업내용

- 2019년 산성시장 내 40개소, 마곡사, 신원사 등 관광지에 20개소 공공와이파이 설치

- 2020년~2022년 공공와이파이 요청 접수시 현장확인 후 설치추진(연10개소)

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
공공와이파이 추가 설치	개소	90		60	10	10	10

■ 그동안 추진실적

❍ 2019년 공주시 공공와이파이 구축공사 : 5개소 20대 설치

- 추진계획 수립(2019년 3월), 실시설계 및 일상감사, 계약심사, 보안성검토 (2019년 4월~6월)

- 도급공사 계약(2019.7.9.), 관급자재 계약(2019년 7월 / 9월), 준공 (2019.11.13.)

- 사업비 : 금242백만원(시비)

- 설치장소 : 산성시장, 마곡사 주차장, 마곡사 야외무대, 신원사, 신원사 버스정류장

❍ 2019년 시내버스 공공와이파이 설치완료 : 63대 모두 설치

- 상반기 20대(4월), 하반기 43대(9월) 설치

- 사업방식 : 전담사업자(통신사)가 설치 및 유지보수 운영, 과기부·도·시 매칭으로 월정료 납부 (공주시 부담금 연13백만원, 자치단체간부담금)

❍ 2019년 문체부 관광지 무료와이파이 설치 : 16개소 59대 설치

- 공모신청(4월), 선정(6월), 공사(6월~11월), 준공(11월)

- 사업방식 : 통신사에서 설치 및 운영, 설치비는 문체부·도·시·통신사 매칭, 회선료는 시에서 부담

- 사업비 : 금328백만원(국12%, 도15%, 시33%, 통신사40%) / 공주시 부담금 금108백만원

- 설치장소 : 산성시장, 산성정류소~금강교 남단 주차장, 황새바위 성지, 중동 가구점길 및 중동 먹자골목, 풀꽃문학관, 마곡사 경내, 수촌리 고분군, 동학사 입구

❍ 2019년 시청사 공공와이파이 설치 : 1개소 28대 설치

- 계획수립(2019년 8월), 도급계약(2019.9.18.), 관급자재 계약(2019.9.30.), 준공(2019.10.18.)

- 사업비 : 금76백만원(시비)

- 설치장소 : 시청사 본관동, 별관1동, 2동 복도

❍ 2019년 공주시 공공와이파이 구축공사(2차) : 5개소 13대 설치

- 계획수립 및 실시설계, 착공(2019년 11월), 준공(2019.12.9.)

- 사업비 : 금36백만원

- 설치장소 : 보건소, 치매안심센터, 농업기술센터, 문예회관, 시의회 본회의장

❍ 2020년 공주시 공공와이파이 구축공사 : 2개소 22대 설치

- 실시설계 (‘20년3월~4월), 도급공사 계약(2020.5.8.), 준공(‘20년 6월)

- 사업비 : 금50백만원(시비)

- 설치장소 : 한옥마을 16대, 환경성건강센터 6대

❍ 2020년 과기정통부 무선인터넷 인프라 구축사업(1차) : 115개소 116대 설치

- 수요조사(‘19년 3월), 설치대상지 확정(‘19년 10월), 공사(‘20년 5월~6월), 운영(‘20년 7월~)

- 사업방식 : 통신사에서 설치 및 운영, 설치비는 과기정통부·통신사 부담, 회선료는 시에서 부담

- 사업비 : 비예산

- 설치장소 : 115개소 116대(시내버스 정류장 106개소, 보건지소(진료소) 7개소, 공공도서관 2개소)

❍ 2020년 과기정통부 무선인터넷 인프라 구축사업(2차) : 45개소 80대 설치

- 수요조사(‘20년 4월), 설치대상지 확정(‘20년 9월), 공사(‘20년 11월~12월), 운영(‘21년 1월~)

- 사업방식 : 통신사에서 설치 및 운영, 설치비는 과기정통부·통신사 부담, 회선료는 시에서 부담

- 사업비 : 비예산

- 설치장소 : 45개소 80대(신관동, 반죽동, 금성동 등 번화가 일원)

❍ 2020년 과기정통부 무선인터넷 인프라 구축사업(2차) 노후 무선AP 교체 : 7개소 12대 교체

- 교체대상지 확정(‘20년 9월), 교체공사(‘20년 11월~12월), 운영(‘21년 1월~)

- 교체대상 : ‘10년~‘14년 행안부 매칭펀드로 설치한 공공와이파이 7개소 12대

- 사업방식 : 무선AP를 설치한 통신사에서 직접 교체 / 설치 및 운영, 회선료 모두 통신사 부담

- 진행상황 : LG U+에서 설치한 12대 교체완료 / KT, SKT 설치 44대는 미추진

❍ 2021년 공주시 공공와이파이 설치공사 : 11개소 11대 설치

- 실시설계 (‘21년3월), 도급공사 계약(2021.4.12.), 공사 중지(4.27.~5.24.) 준공(2021.6.7.)

- 사업비 : 금40백만원(시비)

- 설치장소 : 신관주공6차 입구, 금학동주민센터 주차장, 대웅아파트 입구, 번영3로 미니스톱 앞, 신관동 청해루 뒤, 신관동 착한갈비 앞, 우남아파트 앞 신금지구 놀이터, 금학지구대 뒤 CCTV, 신관동 하이마트 앞, 백제체육관, 산림공원과

❍ 2021년 과기정통부 무선인터넷 인프라 구축사업 : 12개소 19대 신규설치

- 수요조사(‘20년 10월), 설치대상지 확정(‘21년 3월), 공사(‘21년 4월~12월), 운영(‘22년 1월~)

- 사업방식 : 통신사에서 설치 및 운영, 설치비는 과기정통부·통신사 부담, 회선료는 시에서 부담

- 사업비 : 비예산

- 설치장소 : 12개소 19대(중학동, 옥룡동 일원)

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진율	%		0%	100%	100%	100%	20%	100%
공공와이파이 설치 개소	개소	275		90	162	23	16	100%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
			4	1

❍ 각 부서 및 읍면동을 통한 설치대상지 수요조사 : 1회(‘18년 8월)

❍ 공공와이파이 설치 언론보도 : 4회(‘19년 5월,  ’19년 9월,  ‘19년 11월, ‘20년 7월)

■ 향후 추진계획

❍ 2022년 공주시 공공와이파이 설치공사 : 4개소 4대 설치

- 설치대상지 확정(‘22년 2월), 실시설계(‘22년 3월), 공사(‘22년 4월~6월), 준공(‘22년 6월)

- 사업비 : 금20백만원(시비)

- 설치장소 : 도심지역 공공장소, 청년 지원시설 등

❍ 2022년 과기정통부 무선인터넷 인프라 구축사업 : 12개소 22대 설치

- 수요조사(‘21년 12월), 설치대상지 확정(‘21년 3월), 공사(‘21년 4월~12월), 운영(‘22년 1월~)

- 사업방식 : 통신사에서 설치 및 운영, 설치비는 과기정통부·통신사 부담, 회선료는 시에서 부담

- 사업비 : 비예산

- 설치장소 : 12개소 19대(도심지역 공공장소, 청년 공유공간, 공원, 관공서 등)

■ 추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
설치대상지 수요조사
공공와이파이 설치

■ 사업별 투자계획

(단위: 백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	475	0	295	60	60	60
공공와이파이 설치	435	0	285	50	50	50
공공와이파이 공공요금	40	0	10	10	10	10

■ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2018년 ~ 2019년			2020년			2021년			2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	475	919	760	295	489	473	60	103	101	60	164	156	60	163	30
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	475	919	760	295	489	473	60	103	101	60	164	156	60	163	30
민자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ 기대효과

❍ 공공장소 및 관광지 공공와이파이 확대 구축으로 시민과 관광객의 원활한 인터넷 접속환경

조성 및 통신비 절감