98-1

안심마을 만들기 사업(CCTV 설치)

완료(지속)

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 100% √ ‘22년 추진율 -%	공약개요 ❍ CCTV 확대 설치 - 사업기간 : 2019년~2022년 - 사 업 비 : 2,000백만원 - 설치목표 : 신규 300대/교체220대(4년)

☎ 시민안전과장 김만수 840-8640 / 안전정책팀장 박원규 840-8643 / 주무관 김시현 840-8118

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황 : 공주시 CCTV 현황 610개소 1,205대

❍ 정책목표

- 공주시를 안심마을 만들기 위하여 방범용 CCTV를 적재적소에 설치(매년 5억/4년)

- 통합관제 미실시 마을방범용CCTV 100% 통합관제실시(매년 20대/4년)

■ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019년~2022년

❍ 사 업 비 : 2,000백만원(시비2,000)

❍ 사업내용

- 방범용CCTV 설치 계획

구분	2019년	2020년	2021년	2022년
소요예산(백만원)	600	500	500	400
신규	80대	70대	80대	70대
교체	80대	80대	60대

※ 교체대상(저화질 카메라) : 총220대(마을방범용 104대, 방범용 116대)

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
신규설치	대	300	80	70	80	70
교체설치	대	220	80	80	60

■ 그동안 추진실적

확인지표	단위	실적	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진율	%		100%	100%	93%	지속	100%
신 규	대	238	69	65	104		100%
교 체	대	248	107	114	27		100%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
		5

❍ CCTV 운영위원회 개최 : 5회(‘18년 10월 /‘19년 2월 /‘20년 1월/‘21년 2월 /‘22년 2월 )

■ 향후 추진계획  약도 포함

❍ 22. 4 ~ 7월 : 방범용 시시티브이(CCTV) 설치 착공 및 준공

추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
CCTV 설치 대상지 조사
CCTV 실시설계 및 계약
CCTV 설치
CCTV 운영관리

사업별 투자계획                                                    (단위 : 백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계
방범용CCTV 설치	2,600	600	500	500	500	500

■ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2018년 ~ 2019년			2020년			2021년			2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	2,600	3,078	2,546	1,100	1,300	1,300	500	700	700	500	598	546	500	480	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	50	129	123	50	50	50	0	30	30	0	49	43	0	0
시비	2,550	2,949	2,423	1,050	1,250	1,250	500	670	670	500	549	503	500	480
민자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ 기대효과

❍ 시민들이 안심하고 생활하는 안전한 공주시 구축

98-2

안심마을 만들기 사업(범죄예방 디자인 사업)

완료(지속)

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 100% √ ‘22년 추진율 -%	공약개요 - 사업기간 : 2018년 ~ 2020년(3년) - 사업위치 : 공주시 일원 3개소 (신관동 번영2로, 신관동 흑수골길, 옥룡동 중골1길 일원) - 사 업 비 : 1,100백만원(도비 550, 시비 550) - 사업내용 : 조도개선, 벽화그리기, 안심벨 설치, 방범시설 지원 등

☎ 도시정책과장 이영행 840-8540 / 도시경관팀장 이명희 840-8544 / 주무관 박서영 840-8554

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황 : 범죄로부터 열악한 지역에 대하여 범죄를 억제하는 디자인(CPTED)사업을 추진하여 범죄자

의 심리를 위축시켜 범죄 사전 예방 및 안전하고 쾌적한 마을 환경 조성 필요

❍ 정책목표 : 공주시 시내 지역 3개소 범죄예방 디자인사업 추진으로 안심마을 조성

■ 사업개요

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2020년

❍ 사 업 비 : 1,100백만원(도비 550, 시비550)

❍ 사업내용 : 골목길 조도개선 및 벽화그리기, 위험지역 안심벨 설치, 주민편의시설 조성, 방범시설 지원 설치 등

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
신관동 번영2로 범죄예방 디자인사업	개소	1		1
신관동 흑수골길 범죄예방 디자인사업	개소	1		1
옥룡동 중골1길 범죄예방 디자인사업	개소	1			1

■ 그동안 추진실적

❍ 2018.  7. : 번영 2로 범죄예방 디자인사업 충남 공공디자인위원회 심의

❍ 2018. 11. : 번영 2로 범죄예방 디자인사업 발주, 신관동 흑수골길 및 옥룡동 중골 1길 범죄예방 디자인                     사업 주민설명회(1차) 및 공공디자인 컨설팅

❍ 2019.  1. : 신관동 번영2로 범죄예방 디자인 사업 완료

❍ 2019.  4. : 신관동 흑수골길 및 옥룡동 중골1길 범죄예방 디자인 사업 충남 공공디자인위원회 심의

❍ 2019.  6. : 신관동 흑수골길 및 옥룡동 중골1길 범죄예방 디자인 사업 주민설명회(2차)

❍ 2019. 10. : 신관동 흑수골길 범죄예방 디자인사업 발주

❍ 2020.  5. : 신관동 흑수골길 범죄예방 디자인사업 완료

❍ 2020. 11. : 옥룡동 중골 1길 범죄예방 디자인사업 완료

❍ 2021.  9. : 산성동 여성안심귀갓길 범죄예방 디자인 사업 발주, 제안서 평가

❍ 2021. 10. : 산성동 안심귀갓길 범죄예방 디자인 사업 착수, 안심더하고 행복나누는 마을 만들기 사업 충남 범죄예방 디자인 공모선정

❍ 2021. 11. : 산성동 안심귀갓길 범죄예방 디자인 사업 주민의견 수렴

❍ 2021. 12. : 공약 완료심의(신관동 번영2로·흑수골길, 옥룡동 중골1길 범죄예방 디자인사업)

❍ 2021. 12. : 산성동 안심귀갓실 범죄예방 디자인사업 충남 공공디자인센터 컨설팅, 안심더하고 행복나누는 마을만들기 사업 추진방침 결정

❍ 2022.  1. : 산성동 안심귀갓실 범죄예방 디자인사업 주민설명회 및 관련 실과 협의

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진율	%		-	100%	100%	지속	지속	100%
신관동 번영2로 범죄예방 디자인사업	개소	1	-	1				100%
신관동 흑수골길 범죄예방 디자인사업	개소	1	-	60%	1			100%
옥룡동 중골1길 범죄예방 디자인사업	개소	1			1			100%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
3		3

■ 향후 추진계획

❍ 2022. 04. ~ 06. : 산성동 안심귀갓길 범죄예방 디자인사업 시설공사 발주 및 준공, 안심더하고 행복나누는 마을만들기사업 제안서 평가 및 용역 착수

❍ 2022. 07. ~ 12. : 안심더하고 행복나누는 마을만들기사업 시설공사 발주 및 준공

추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
신관동 번영2로 범죄예방 디자인사업
신관동 흑수골길 범죄예방 디자인사업
옥룡동 중골1길 범죄예방 디자인사업

사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	1,100	500	340	260	-	-
신관동 번영2로 범죄예방 디자인사업	410	410			-	-
신관동 흑수골길 범죄예방 디자인사업	390	50	340
옥룡동 중골1길 범죄예방 디자인사업	300	40		260

■ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2018년 ~ 2019년			2020년			2021년			2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	1,100	1,710	1,630	840	840	840	260	260	204	0	100	76	0	510	510
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	550	703	675	420	420	420	130	130	102	0	0	0	0	153	153
시비	550	1,007	955	420	420	420	130	130	102	0	100	76	0	357	357
민자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ 기대효과

❍ 시민들이 안심하고 생활하는 안전한 공주시 구축