99-1

어린이 안전보행환경 조성(어린이 보호 CCTV)

완료

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 100% √ ‘22년 추진율 100%	공약개요 ❍ 어린이 안전보행환경 조성 - 사업기간 : 2019년~2022년 - 사 업 비 : 500백만원 - 설치목표 · 어린이 보행지역 안전을 위한 CCTV 설치(19대/4년) · CCTV 비상벨 설치 확대(80대/4년)

☎ 시민안전과장 김만수 840-8640 / 안전정책팀장 박원규 840-8643 / 주무관 김시현 840-8118

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황

- 어린이보호구역 CCTV 현황 : 50개소 110대

- CCTV 비상벨 설치 : 84대

❍ 정책목표

- 어린이 보행지역 안전을 위한 CCTV 설치(67대추가, 32대노후교체/4년)

- CCTV 비상벨 설치 확대(6대추가, 50대노후교체/4년)

- CCTV 안내 LED전광판 설치(50대/4년)

■ 사업개요

세부사업명

❍ 사업기간 : 2019년~2022년

❍ 사 업 비 : 500백만원(시비500)

❍ 사업내용

- 방범용CCTV 설치 계획

구분	2019년	2020년	2021년	2022년
소요예산(백만원)	100	135	135	125
신규	4대	5대	5대	5대
비상벨	20대	20대	20대	20대

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
CCTV 설치	대	57	38	4	5	5	5
비상벨 설치	대	88	9	20	20	20	19

■ 그동안 추진실적

❍  어린이보호구역 50개소 CCTV 114대 및 비상벨 88대 설치완료

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진율	%	202	100%	100%	100%	%	%	100%
CCTV 설치	대	114	105	4	5			100%
비상벨 설치	대	88	64	20	4			100%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
		4

❍ CCTV 운영위원회 개최 : 4회(‘18년 10월 / ‘19년 2월 / ‘20년 1월 /‘21년 2월)

■ 향후 추진계획

❍ 어린이보호구역 CCTV 유지보수

추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
CCTV/비상벨 설치 대상지 조사
CCTV 실시설계 및 계약
CCTV/비상벨 설치
CCTV/비상벨 운영관리

사업별 투자계획                                                   (단위 : 백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	682	187	100	135	135	125
CCTV/비상벨 설치	682	187	100	135	135	125

■ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2018년 ~ 2019년			2020년			2021년			2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	682	322	322	287	287	287	135	35	35	135	0	0	125	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	187	187	187	187	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	495	135	135	100	100	100	135	35	35	135	0	0	125	0	0
민자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ 기대효과

❍ 어린이보호구역 CCTV 확대로 어린이 보행 안전 도모

99-2

어린이 안전보행환경 조성

완료

√ 임기구분 임기내 / 임기후 √ 사업주체 국가 / 공주시 / 민간 √ 정부도움 해당없음 / 재정 / 제도 등 √ 신규여부 계속 / 신규 √ 사업시기 단기 / 중기 / 장기 √ 예산구분 예산 / 비예산 √ 이행단계 준비 / 추진 / 완료 / 지속 √ 전체 이행률 100% √ ‘22년 추진율 100%	공약개요 ❍ 어린이 안전보행환경 조성 - 어린이보호구역 내 안전시설 정비 - 안전한 보행환경을 위한 보호구역 내 보도 신설 및 재정비

☎ 도로과장 김영준 840-8560 / 도로시설팀장 전영태 840-8191 / 주무관 이동후 840-8192

■ 현황 및 정책목표

❍ 현황

- 어린이보호구역 38개소

❍ 정책목표

- 어린이 보행지역 안전을 위한 보도 신설 및 재정비

- 어린이 보호구역 내 안전시설 정비 (과속방지턱, 적색포장, 방호울타리, 안전대기장치, 옐로우카펫 등)

■ 사업개요

❍ 사업기간 : 2018년~2022년

❍ 사 업 비 : 1,124백만원(국비 200, 도비 324, 시비 600)

- 지역교통안전환경개선사업으로 어린이 보호구역 내 정비예산 지속적 보조금 교부 신청 예정

❍ 사업내용

- 보도 신설 및 재정비

- 어린이 보호구역 내 안전시설 정비 (도로 포장 상태, 과속방지턱, 적색포장, 방호울타리, 안전대기장치, 옐로우카펫 등)

구분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
소요예산(백만원)	724	100	100	100	100

■ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	비고
보도 및 안전시설 정비	개소	18개소	10	2	2	2	2

■ 그동안 추진실적

❍ ‵18년 : 어린이보호구역 10개소 정비완료

❍ ‵19. 3. : 어린이보호구역 교통안전시설 개선 추진방침 결정(5개소)

❍ ‵19년 : 어린이보호구역 5개소 정비완료

❍ ‵20년 : 어린이보호구역 3개소 정비완료

❍ ‵21년 : 어린이보호구역 4개소 정비완료

확인지표	단위	실적	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이행률
연도별 추진율	%		100%	100%	100%	100%	0%	100%
보도 및 안전시설 설치	개소	22	10	5	3	4		100%

■ 시민참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론 / 방송보도	기 타
-	-	-	-	-

❍

■ 향후 추진계획

❍ ‵22년 국비확보 노력 / 어린이 보호구역 추가 신설 및 재정비 지속적 추진

추진일정

세부 사업명	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
어린이보호구역 정비대상지 조사
보도 및 안전시설 실시설계 및 계약
보도 및 안전시설 설치
보도 및 안전시설 운영관리

사업별 투자계획                                                      (단위 : 백만원)

세부 사업명	계	임기중 투자계획					임기후 투자계획
		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
총 계	1,124	724	100	100	100	100	-
보도 및 안전시설 정비	1,124	724	100	100	100	100	-

■ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2018년 ~ 2019년			2020년			2021년			2022년
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	1,124	2,214	1,550	824	1,164	840	100	240	240	100	470	470	100	340	0
국비	200	840	670	200	420	420	0	120	120	0	130	130	0	170
도비	324	384	60	324	324	0	0	0	0	0	60	60	0	0
시비	600	990	820	300	420	420	100	120	120	100	280	280	100	170
민자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ 기대효과

❍ 어린이보호구역 내 안전시설 보강을 통한 교통사고 위험 감소 및 안전한 보행환경 조성