32		제2금강교 임기 내 착공	이행단계
			완료

신규여부	신규□ 계속■	예산구분	예산■ 비예산□
사업시기	단기□ 중기■ 장기□	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	시비	기타
정부지원	재정■ 제도□ 없음□		38,520	19,260		19,260
연계여부	국정과제■ 도정과제□ 비해당□	완료시기	임기 내■ 임기 후□
이행단계	추진중□ 완료■ 완료(계속)□	이행률	100%

주관부서	부 서 명	과 장	도로시설팀장	담당자
	도로과	김태완(☎8560)	정종찬(☎8386)	권용덕(☎8387)

Ⅰ	공약개요

□ 목적

❍ 행복도시와 공주시간 대중교통 접근성 강화를 통해 공주의 역사 문화자원, 교육, 행정 중심의 구도심으로 접근을 위해 증가되는 교통량에 능동적 대응

❍ 행복도시-공주 광역 BRT사업과 연계 대중교통 접근성 개선 및 체계적인 교통망 수립

□ 현황

❍ 문화재청 문화재현상변경 재심의 조건부 통과(2022.8.12.)에 따라 실시설계, 각종 영향 평가 등 행정절차 본격 재착수

❍ 문화재현상변경허가 조건 이행을 위하여 관계전문가 자문위원회를 구성 교량디자인 자문 추진 중

□ 목표

❍ 제2금강교 임기 내 착공

□ 기대효과

❍ 노후 금강교 보호 및 상습 교통정체 해소

❍ 행복도시~공주 광역 BRT사업과 연계 대중교통 접근성 개선 및 상생발전 도모

Ⅱ	사업 계획

□ 공약사업 개요

□ 행복도시~공주 3구간 도로건설(제2금강교)

❍ 사업위치 : 공주시 금성동 68-1 ~ 신관동 495-102 일원

❍ 사업기간 : 2017년 ~ 2026년

❍ 사 업 비 : 38,520백만원(국 19,260, 시 19,260)

❍ 사업내용

- 교량가설 : L= 513.7m, B= 9.9m(2차로) ~ 12.9m(3차로-신관측 포켓차로)

- 접속도로 : L= 306.3m

□ 사업별 추진일정

사업명	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
실시설계	━	━
착공	━	━	━	━
교량가설	━	━
준공

□ 사업별 투자계획

(백만원)

사업명	계	임기 내					임기 후
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
총 계	38,520	1,543	9,886	4,437	11,000	11,654
행복도시-공주 3구간 도로건설(제2금강교)	38,520	1,543	9,886	4,437	11,000	11,654

Ⅲ	확인지표 및 이행률

확인지표	단위	목표/실적		2022년	2023년	2024년	2025년	이행률
연도별 이행률	%				100			100
실시설계 및 공사 착공	식	목표	1		1
		실적	1		1

Ⅳ	추진실적

□ 공약가계부

(단위 : 백만원)

구분	계			2022년			2023년			2024년			2025년			2026년 이후
	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행	계획	확보	집행
계	38,520	1,400	1,400	1,543	1,543	1,543	9,886	9,886		4,437			11,000			11,654
국비	19,260	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	4,543	4,543		2,290			5,500			5,827
도비
시비	19,260	300	300	443	443	443	5,343	5,343		2,147			5,500			5,827
민자

□ 시민참여 실적

(단위 : 회)

간담회⋅토론회	언론⋅방송보도	설문조사	그 밖의(시연회 등)
	4		1

❍ 2019. 03. 18. : 외부전문가 자문단 구성(9명)

❍ 2022. 08. 16. : 제2금강교 문화재현상변경허가 조건부 통과, 2023년 착공, 2026년 준공

❍ 2023. 08. 30. : 제2금강교 착공

□ 추진실적

▢ 제2금강교 건설사업

❍ 2014. 11.     : 제2금강교 국토교통부 광역교통개선대책(2차) 변경 반영

❍ 2017. 04.     : 기본 및 실시설계용역 착수(행복청)

❍ 2017. 08. 01. : 업무협약 (공주시 ↔ 행정중심복합도시건설청)

❍ 2020. 06. 10. : 문화재 현상변경 심의 → 조건부 통과(2차로로 축소, 현 금강교와 동일 높이)

❍ 2021. 07. 14. : 하천점용허가 신청 → 보완(홍수위 관리기준에 맞도록 교량계획고 상향)

❍ 2021. 08. 04. : 하천점용허가 완료(허가번호: 제2021-82호)

❍ 2021. 11. 16. : 세계유산센터 유산영향평가 협의 완료

❍ 2022. 03. ~ 07. : 문화재 현상변경 재심의를 위한 사적분과위원회 3차 자문 실시

❍ 2022. 08. 12. : 제2금강교 문화재 현상변경 재심의 조건부 통과

❍ 2022. 09. 15. : 문화재현상변경 조건부 이행을 위한 관계전문가 자문위원회 구성(5인)

❍ 2022. 10. 05. : 교량디자인 관계전문가 자문회의(1회차)

❍ 2022. 11. 07. : 문화재지표조사 협의 완료

❍ 2022. 11. 09. : 소규모환경영향평가 협의 (금강유역환경청)

❍ 2022. 11. 25. : 소규모재해영향평가 협의 (시민안전과)

❍ 2022. 12. 05. : 유네스코 세계유산센터 유산영향평가 최종보고서 제출

❍ 2022. 12. 13. : 문화재현상변경 조건부 관련 교량(난간) 디자인 관계전문가 자문 완료

❍ 2023. 01. 17. : 소규모재해영향평가 협의 완료

❍ 2023. 03. 13. : 소규모환경영향평가, 설계VE, 설계안전성 검토, 기술자문, 금성삼거리 회전교차로 변경을 위한 문화재 및 하천점용협의 완료

❍ 2023. 04. 28. : 실시설계 완료

❍ 2023. 05. 16. : 조달청 계약 의뢰

❍ 2023. 08. 16. : 도로구역(결정) 변경 및 지형도면 고시

❍ 2023. 08. 25. : 공사 착공

Ⅴ	향후 추진계획

▢ 제2금강교 건설사업

❍ 2026. 08. : 공사 준공

□ 관련자료

공사계획 평면도

조  감  도